특수공시

1		영광 문화원 건립

군민들의 문화 활동 참여 욕구 증가에 따른 기회와 체험의 장소 제공 및 문화기반시설 확충으로 지역문화 발전 도모

□ 사업개요

○ 사업위치 : 영광읍 남천리 80-4 외 3필지(영광예술의전당 부지 내)

○ 사 업 비 : 3,700백만 원(국 1,480, 군 2,220)

○ 사업기간 : 2019∼2020년(2년간)

○ 주요내용 : 문화원 1동 신축(지하1층, 지상 3층)

- 건축(연)면적 : 493.05㎡(1,516.59㎡)

- 주용도/구조 : 문화 및 집회시설/ 철근콘크리트·슬래브

- 주요시설 : 사무실, 전시실, 교육실, 다목적실, 문서고, 휴게실 등

□ 추진상황

○ 2017. 01. 25. : 영광문화원 건립공사 변경계획 수립

○ 2017. 04. 18. : 영광군의회 공유재산심의(변경) 승인

○ 2017. 04. 25. : 문화원 건립지원 사업타당성 적정(문체부)

○ 2017. 05. 24. : 지방재정투자심사 의결(전라남도-적정)

○ 2017. 09. 27. : 문화원 건립 국비보조 예산 가내시(국비 1.4억)

○ 2018. 02. 08. : 실시설계용역 착공(신아건축사 대표 김성태)

○ 2019. 01. 07 : 문화원 경관(디자인) 심의 의결

○ 2019. 04. 16 : 전남도 계약심사 심의 의결

○ 2019. 05. 10 : 영광문화원 건립공사 발주

○ 2019. 05. 09. : 영광 문화원 건립공사 발주(재무과)

○ 2019. 05. 19. : 실시설계용역 준공(신아건축사 대표 김성태)

○ 2019. 06. 05. : 영광 문화원 건립공사 착공[(주)일성건설]

○ 2020. 03. 13. :  영광문화원 건립공사 준공

추진부서
	문화관광과장 유영직 문화예술팀장 윤상근 주무관 박시영 (☏ 5225)

위  치  도

건립예정지

조  감  도

2		화물자동차 공영차고지 설치

화물자동차 공영차고지 설치로 물류 경쟁력을 확보하여 지역 물류

유통 효율화 및 외부 이용객 유치로 지역경제 활성화 기여

□ 추진계획

○ 위    치 : 영광군 영광읍 백학리 308-1번지 외 36필지

○ 소요예산 : 80억원(국비 56, 군비 24)

※ 진입도로개설 별도 소요 : 50억원(국비 4, 군비 46)

○ 조성면적 : 49,759㎡ (주차장 316면, 관리동 768㎡, 내부도로 등)

○ 시   기 : 2017∼2022(6년간)

□ 추진상황

○ 공영차고지 조성사업 타당성 조사 및 기본계획용역 : ‘16. 7∼12월

○ 화물자동차 공영차고지 사업 신청 : ’17. 2. 8.

○ 군 관리계획(주차장) 변경 용역완료 : ’17. 3 ∼ 12월.

○ 군 관리계획(주차장) 변경 승인고시 : ’17. 11. 30.

○ 기본 및 실시설계용역 추진 : ’18. 1 ∼ ‘19. 8월

○ 공영차고지 및 도로개설공사 주민 설명회 : ‘18. 7. 4

○ 실시계획인가 고시 및 보상계획 열람공고 : ’19. 6. 13.

□ 금후계획

○ 공영차고지 편입토지 재결신청서 열람공고: 2020. 7. 9. ~ 7. 23.

○ 기본 및 실시계획 용역 및 건축허가: 2020. 9. ~ 2021. 6.

○ 문화재 시굴 조사: 2020. 10. ~ 2021. 2.

○ 공영차고지 조성사업 및 도로개설공사: 2020. 11. ~ 2022. 12.

추진부서
	안전관리과장 김효선 교통행정담당 김태우 주무관 이기창 (☏5365)

위  치  도

조  감  도

3		묘량 농공단지 조성

산업용지의 안정적 공급을 위해 신규 농공단지를 조성함으로써 지역 균형발전과 지역경제 활성화에 기여

□ 추진계획

○ 위    치 : 묘량면 신천리, 영양리 일원

○ 사업내용 : 214,055㎡(64,752평)

○ 사 업 비 : 14,305백만 원(군비)

- ’18년 까지 1,996백만 원/ ‘19년 1,000백만 원/ ’20년 이후 11,309백만 원

○ 사업기간 : 2017∼2022년(6년간)

○ 유치업종 : 식료품, 음료, 비금속광물제품, 기타기계 및 장비, 기타제품 제조업

□ 추진상황

○ 농공단지 입지 선정	: ’17. 1. 23. ~ 6. 30.

○ 농공단지 사전 타당성조사 용역	: ’17. 8. 25. ~ 11. 30.

○ 농공단지 지정계획 고시	: ’17. 12. 28.

○ 주민설명회 개최(지역주민, 토지소유자) : ’18. 2. 27.

○ 기본 및 실시설계, 환경영향평가 용역 추진 : ’18. 6. 18. ~ ‘20. 12. 30.

○ 산업단지계획 승인신청(전라남도)      : ’19. 10. 30.

○ 주민의견청취 및 합동설명회 개최      : ’19. 11. 7. / ‘20. 4. 22.

○ 관계기관 협의 진행(국토부, 환경청 등) : ’19. 12. ~

□ 금후계획

○ 환경영향평가(본안) 협의                 : ‘20. 9월

○ 지방산업단지계획심의위원회 심의 및 승인고시 : ‘20. 10월

○ 농공단지 조성사업 추진                  : ‘20. 12. ~ ’22. 12월

추진부서
	투자경제과장 장남종 산단관리팀장 심재식 주무관 배재훈 (☏ 5462)

위  치  도

토지이용계획도

4		영광 공설 추모공원 조성

공설 장사시설 설치로 원거리 타 지역 이용에 따른 군민 불편을

해소하고 경제적인 부담 경감

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 1식(부지면적 : 260,000㎡)

- 장사시설(28,500㎡) : 봉안당(2,500㎡), 자연장지(26,000㎡)

- 부대시설(22,800㎡) : 주차장, 관리사무실, 매점 및 휴게실

- 기타(208,700㎡) : 녹지면적(원형보전)

○ 사 업 비 : 9,805백만 원(국비 4,347, 도비 559, 군비 4,899)

○ 사업기간 : 2018∼2022년(5년간)

□ 추진상황

○ 영광군 장사시설 수급계획 용역 완료 : 2016. 8월

○ 공설추모공원 조성부지 공모(1차) : 2017. 6월

- 기    간 : 2017. 6. 28. ~ 7. 27.(1개월간) / 응모요건 부적합

○ 공설추모공원 조성부지 공모(2차) : 2017. 9월

- 기    간 : 2017. 9. 11. ~ 10. 30.(50일간) / 응모요건 부적합

○ 공설추모공원 조성부지 공모(3차) : 2018. 4월

- 기    간 : 2018. 4. 2. ~ 6. 1.(60일간) / 군남면 대덕4리 응모

○ 공설추모공원 입지타당성 조사 용역 완료 : 2019. 4. 19.

○ 공설추모공원 조성사업 대상지 확정 공고 : 2019. 6. 27.

○ 공설추모공원 장사시설 설치 자문 : 2019. 11. 14.

□ 금후계획

○ 공설추모공원 계약심사 및 일상감사 : 2020. 3.

추진부서
	노인가정과장 김점기 노인시설팀장 최영철 주무관 김현우 (☏ 5856)

사업대상지

위  치  도

조  감  도

5		주민주도형 마을만들기 사업

마을주민이 직접 현장포럼을 거쳐 마을 발전방향을 모색한 주민주도형 사업 시행으로 주민 자긍심 고취 및 쾌적한 마을환경 조성

□ 추진계획

마을명			사업기간	사업비(백만원)		사업내용
읍면	리	마을		총 사업비	‘19년 사업비
계		7개	2~3년	4,000	1,355
백수	논산	월산	2019~2020	500	196	월산제 둘레길, 월산제 쉼터 등
백수	상사	한성	2019~2020	500	181	마을회관·건강관리실 리모델링, 정자 및 경관 정비 등
홍농	진덕	산덕	2019~2020	500	240	전통공방, 주차장 등
홍농	칠곡	항월	2019~2020	500	210	목맥황금습지 관찰대, 달빛 어부쉼터 등
대마	남산	남산	2019~2020	500	151	담장정비, 마을둘레길정비, 생태탐방로정비 등
묘량	영양	영촌	2019~2020	500	130	담장정비, 창고 리모델링 등
법성	월산	산하치	2019~2021	1,000	247	농업인 복지회관, 여유로운 쉼터, 아름다운 돌담장 등

□ 추진상황

○ 마을현장포럼 및 예비계획서 작성  : 2017. 3. ∼ 12.

○ 신규사업 공모신청                : 2018. 2.  8.

○ 신규사업 평가                    : 2018. 3. 26. ∼ 2018. 4. 3.

○ 신규사업 공모선정                : 2018. 8. 31.

○ 기본계획수립 및 주민설명회       : 2019. 1. ~ 8.

○ 기본계획수립(안) 주민공청회       : 2019. 12.

□ 금후계획

○ 기본계획 승인                    : 2020. 4.

○ 시행계획 승인 및 공사 착공       : 2020. 6.

○ 사업 준공                        : 2020. 12.(산하치 2021. 12.)

추진부서
	건설과장 오귀동 농촌개발팀장 성용제 주무관 안영선 (☏ 5193)

조  감  도